공약연번 103	배드민턴 전용구장 건립		담당부서
			스포츠산업과

	최종목표
체육시설 인프라 구축 및 체육활동 여건 개선

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	-	총사업비	8,500백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ○ 일부추진 ● 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년

○ 위    치 : 대양동 950번지(국제축구센터 내)

○ 사 업 량 : 배드민턴 전용구장 2,410㎡(730PY), 코트 10면

○ 사업내용 : 배드민턴 전용구장 건립 및 주차장 조성

○ 사 업 비 : 총 8,500백만원(국비 2,600, 시비 5,900)

☐ 추진현황

○ 부지 검토 및 계획 수립 중

- □ 대연체육공원 □ 목포국제축구센터

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2024	부지 확보 및 계획 수립	-	10%
2025	예산 확보 및 행정절차 이행	-	50%
2026	공사 착공 및 사업완료	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	8,500				2,830	5,670
확보액	-				850	1,700
집행액	-				1,980	3,970

☐ 향후계획

○ 부지확보 및 계획수립                     : ’24. 10. ~ ’24. 12.

○ 26년 균특회계 신청(전남도)               : ’25.  1. ~ ’25.  6.

○ 실시설계 및 사전 행정절차 진행          : ’25.  7. ~ ’25. 12.

○ 공사 착공 및 공사 준공                  : ’26.  1. ~ ’26. 12.

※목차

담당부서		스포츠산업과장 박진홍 스포츠시설팀장 백무황 주무관 이상진(☎3562)