공약연번	적산가옥 밀집 지역 1897 근대역사문화거리 조성		담당부서
124
			도시재생과

	최종목표
원도심 일원 근대문화자산을 활용한 특화거리 조성으로 지역관광 활성화 및 문화상권 브랜드 강화

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ○ 지자체 ●	추 진 율	100%	총사업비	5,800백만원
추진상황	완료 ● 완료후계속추진 ○ 정상추진 ○ 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 기    간 : 2022 ~ 2023

○ 위    치 : 만호․유달동 일원

○ 사 업 량 : 만호동 일원 30만㎡

○ 사업내용 : 가로경관 정비 및 특화거리 조성

○ 사 업 비 : 5,800백만원(국비 3,630, 시비 2,100, 기타 70)

☐ 추진현황

○ 1897개항문화거리 도시재생뉴딜사업

∙ 다목적광장(주차장) 3개소 조성 완료 : 총 61면(‘22. 5월)

- 1897 여행자쉼터 주차장 : 9면 / - 목포일번가 주차장 : 17면

- 1897 개항장 주차장 : 35면

∙ 1897 개항문화거리 지중화 완료(‘22. 11월, 건설과 연계사업)

∙ 개항문화 가로조성사업 도로정비 완료 : 4개 노선 L=1.9km(‘23. 4월)

- 1897 개항문화거리  (김영자갤러리→유달초        L=750m)

- 청춘로              (오거리 ~ 선구의 거리        L=430m)

- 목포일번가          (목포근대역사관→여객터미널  L=500m)

- 목포진테마거리      (만호로 29번길               L=220m)

∙ 근대역사문화거리 일원 일방통행 및 가변주차 조성 및 시행

: 일방통행 3개 노선 L=1.55km / 가변주차 총 210면 (‘23. 3월)

- 1897 개항문화거리 (김영자갤러리 → 유달초, L=750m, 주차면 105면)

- 목포일번가 (목포근대역사관 → 여객터미널, L=500m, 주차면 66면)

- 해안로165번길 (신안교육지원청 → 초원골드맨션, L=300m, 주차면 39면)

∙ 간판정비 사업

- 개항문화거리(청춘로) 117개소 완료(‘20. 12월)

- 1897 개항문화․건해산물상가거리 104개소 완료(‘22. 7월)

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
2회	2회	7회	8회	1회

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	· 주차장 조성 · 지중화사업 및 도로포장 · 간판정비	· 주차장 조성 완료 · 지중화 및 도로포장 완료 · 간판정비 완료	50%
2023	· 일방통행 및 가변주차 조성	· 일방통행 및 가변주차 조성 완료	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	5,800	4,877	923	-	-	-
확보액	5,800	4,877	923	-	-	-
집행액	5,480	4,877	603	-	-	-

☐ 향후계획

○ 근대역사거리 일원 시설물 관리부서 이관 추진      : ′23. 9월~

담당부서		도시재생과장 김현종 재생사업팀장 강지한 주무관 김은향(☎3686)