공약연번	백련지구 공원 환경 리모델링 추진		담당부서
126
			공원녹지과

	최종목표
주거밀집지역의 놀거리, 즐길거리, 쉼이 있는 쾌적한 공원환경 조성

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	70%	총사업비	1,330백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2023

○ 위    치 : 백련근린공원(목포시 연산동 1952번지)

○ 사 업 량 : 공원(16,291㎡) 리모델링

○ 사업내용 : 경관 조명, 그늘막 등 편익시설, 놀이시설 정비, 수목식재 등

○ 사 업 비 : 총 1,330백만원(국비 1,000, 도비 230, 시비 100)

☐ 추진현황

○ 2022. 11. : 막구조 파고라(1동 설치)

○ 2023. 9.

- 백련공원 리모델링 관련 실시설계용역 추진중 (조경식재 및 시설물설치)

- 백련공원 내 별빛터널 및 인터랙티브 조명 계약 추진중

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	막구조파고라 설치	설치완료	5%
2023	백련공원 리모델링	설계용역 추진중	70%
2024	백련공원 리모델링 완료		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	1,330	1,330	-
확보액	1,330	1,330
집행액	1,330	100	960	270

☐ 향후계획

○ 2023. 10. : 건설기술심의, 계약심사 등 행정절차 이행

○ 2023. 11. : 백련공원 리모델링 사업 발주(조경분야) 및 계약

○ 2023. 12. : 경관조명 및 인터랙티브 조명 설치 완료

○ 2024.  4. : 사업준공

※목차

담당부서		공원녹지과장 최양선 공원시설팀장 김영범 주무관 이종희(☎3634)