공약연번	구)경찰서 사거리 교통 병목 해소(우회도로개설)		담당부서
133
			도시디자인과

	최종목표
구)경찰서 사거리 교통 병목 해소를 통한 시민 삶의 질 제고

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	10 %	총사업비	35,000 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 12.

○ 위    치 : 용해지구 인근

○ 사 업 량 : 구조개선 2개소, 우회도로 개설 2개소, 도로확장 3개소

○ 사 업 비 : 350억원(도비 45, 시비 163, 민간 142)

☐ 추진현황

○ ‵22.  6. : 구)경찰서사거리~용해삼거리 간 ‵23년 한전지중화 신청

○ ‵22. 10. : 구)경찰서사거리~용해삼거리 간 도로구조개선 실시설계 발주

○ ‵22. 12. : 양을산 산림욕장~실내체육관 간 도로개설 공사관련 주민설명회 추진

○ ‵23.  2. : 구)경찰서사거리~용해삼거리 간 도로교통공단 교통개선 기술지원

○ ‵23.  3. : 실내체육관~삼향동사무소 간 위험도로 구조개선 외 1개소 설계 발주

○ ‵23.  5. : 양을산 산림욕장~실내체육관 간 도로개설 공사관련 투자심사 완료

○ ‵23.  7. : 구)경찰서사거리~용해삼거리 간 도로구조개선 건설기술심의 완료

구)경찰서사거리~용해삼거리 간 ‵24년 한전지중화 신청(그린뉴딜)

○ ‵23.  9. : 구)경찰서사거리~용해삼거리 간 도로구조개선 실시설계 완료

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
3	1	1	-	-

* 양을산 산림욕장~실내체육관 간 도로개설 공사 관련 주민설명회 3회 및 설문조사 1회 실시

* 구)경찰서 사거리~용해지구 삼거리 간 도로구조개선관련 도로교통공단 기술 자문 1회 실시

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	구조개선(1) 추진	실시설계 추진 완료	10%
2023	구조개선(2), 우회도로(1) 추진	실시설계 추진 중	30%
2024	구조개선(2), 우회도로(2), 도로확장(3) 추진	-	60%
2025	구조개선(2), 우회도로(2), 도로확장(3) 추진	-	80%
2026	구조개선(2), 우회도로(2), 도로확장(3) 완료	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	35,000	200	6,100	12,700	14,200	1,800
확보액	400	200	200	-	-	-
집행액	176	-	176	-	-	-

☐ 향후계획

○ ‵23. 12. : 실내체육관~삼향동사무소 간 위험도로 구조개선 외 1개소 실시설계 완료

○ ‵24. 04. : 실내체육관~삼향동사무소 간 위험도로 구조개선 외 1개소 공사추진

○ ‵24. 05. : 용해2지구~마리아회고 도로개설 외 2개소 공사추진(민간+목포시)

○ ‵24. 07. : 구)경찰서사거리~용해삼거리 간 도로구조개선 공사 추진   ※목차

담당부서		도시디자인과장 송창헌 개발팀장 차태명 주무관 김태성(☎3445)