공약연번	기후대응 도시숲, 명품 가로수길 조성		담당부서
149
			공원녹지과

	최종목표
○ 대양산단에 기후대응 도시숲 조성으로 기후변화 대응 및 도시경관 개선 ○ 옥암로, 영산로 등 명품 가로수길로 지정하여 가로수 바꿔심기, 수형조절 등 시민과 가로수가 공존하는 쾌적한 가로경관으로 조성

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가● 지자체●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	40 %	총사업비	8,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 위    치 : 대양산단 등 8개소

- 도심생활권 : 목포역~철도웰빙공원~삼향천~평화광장~입암산~삼학도

- 녹색둘레길 : 평화광장~삼학도~유달유원지~노을공원~방망이섬~시입구

○ 사 업 량 : 수목식재 50,000주, 가로수 수형조절 등

○ 사업내용

– 기후대응 도시숲 조성 14㏊, 느티나무 등 큰나무 7,200주

- 명품가로수길 조성 16㎞, 수목식재(관목포함) 42,800주

○ 사 업 비 : 총 8,000백만원(국비 2,000, 도비 2,000, 시비 4,000)

- 분야별 예산편성 : 기후대응 도시숲 4,000, 명품가로수길 810

☐ 추진현황

○ 2020. ~ 2023. : 기후대응 도시숲 조성(대양산단 3ha, 옥암수변 3ha)

○ 2023. 5. ~ 8.  : 고하도 신규가로수길, 가로변 수목(가로수/수벽) 정비

○ 2023. 5.     : 2024년 사업공모(대양산단 1ha, 웰빙공원 1ha)

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누 적 진도율
2022	대양산단 미세먼지 차단숲 조성	조성완료	20%
2023	고하도 등 명품가로숲길 조성	고하도 가로수길 조성	40%
2024	대양산단 등 기후대응 도시숲 조성 남악로, 양을로 등 명품 가로숲길 조성	-	60%
2025	웰빙공원 등 기후대응 도시숲 조성 부흥로, 신흥로 등 명품 가로숲길 조성	-	80%
2026	옥암 수변공원 등 도시숲 조성 미항로, 평화로 등 명품가로숲길 조성	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2023년까지	2024년	2025년	2026년
예산액	8,000	2,500	2,500	2,000	1,000
확보액	2,500	2,500	-	-	-
집행액	1,770	1,770

☐ 향후계획

○‘23. 10.        : 목포시 도시숲위원 개회(가로환경 개선방안 모색)

○‘24.  1. ~  3.  : 실시설계 용역

○‘24.  4. ~ 11.  : 공사발주 및 추진

○‘25. ~‘26.     : 기후대응 도시숲 조성 연도별 사업공모

※목차

담당부서		공원녹지과장 최양선 녹지팀장 정장범 주무관 임성기(☎3514)