공약연번	해양레포츠센터 건립사업 추진		담당부서
76
			해양항만과

	최종목표
해양레포츠 교육·훈련·체험할 수 있는 센터를 건립하여 해양레포츠 이용 인구 저변확대 및 활성화에 기여.

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	10%	총사업비	7,500백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ○ 일부추진 ● 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2025.

○ 위    치 : 목포시 죽교동 571-100번지(국유지 : 교육부)

○ 사 업 량 : 센터 1동, 계류시설 등

○ 사업내용 : 해양레포츠 교육, 체험장(다이빙풀, VR체험 등) 조성

○ 사 업 비 : 총 7,500백만원(도비50% 3,750, 시비50% 3,750)

☐ 추진현황

○ 타당성조사 및 기본계획수립 용역, 전남도 투자심사 : ‘16.11.~‘18.6.

○ 기본 및 실시설계용역 착수                       : ‘19. 9.

○ 기본 및 실시설계용역 일시중지                   : ‘20. 7.

- 사유 : 평화광장 구조개선사업 변경에 따른 센터 위치 조정 등

○ 주민(우미파크빌) 및 상가 진정민원 접수(조망권 상실, 소음 등) : ‘21. 1. ~ 7.

○ 사업계획변경 승인(전라남도)                     : `22. 11.

- 변경주요내용 : 위치(평화광장 ⇨ 목포해양대), 사업기한(`22년 ⇨ `25년)

○ 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 착수(변경위치)  : `22. 12.

○ 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 일시중지       : `23. 4.

- 사유 : 중앙부처 등 관계기관 협의 등

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
1	-	-	-	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2023	사업추진안 검토 및 공사 착공	사업추진안 검토중	10%
2024	공사 추진	-	50%
2025	공사 준공		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	7,500	4,636	-	-	2,864	-
확보액	4,636	4,636	-	-	-	-
집행액	310	310	-	-	-	-

☐ 향후계획

○ 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료   : `24. 1.

○ 실시설계 용역 추진                      : `24. 3.

※목차

담당부서		해양항만과장 강혜선 해양레저팀장 박치현 주무관 노태진(☎8549)