관광경제	전천후 테니스 전용구장 신설		담당부서
104
			스포츠산업과

	최종목표
노후된 유달 시립테니스장, 정구장을 개보수하여 우천 등 기상상황에 유연하게 대처할 수 있는 전천후 운동시설을 건립하고자 함

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	70 %	총사업비 (예산확보)	5,500 백만원 (5,500백만원)
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 6.

○ 위    치 : 용당동 1069-60(구. 유달경기장)

○ 사 업 비 : 55억원(국비 20억원, 시비 35억원)

○ 사업내용 : 배드민턴 전용구장 건립 및 주차장 조성

구 분	예상 소요금액	내 용
건 축	37억	사무실 2개동, 막구조 4~5면
토 목	14억	인조잔디(6,062㎡)코트조성 및 담장 등 부대시설 보수
전기, 통신 소방공사	4억	조명등 LED 500W 120개 설치 등

☐ 추진현황

○ '23.  5. : 토질조사

○ '23.  6. : 제4회 경관심의(심의 의견 반영 중)

○ '23. 12. : 실시설계용역 완료(토목, 건축, 전기, 통신)

○ '24.  3. : 도시관리계획 결정(변경) 도시계획심의위원회 및 사전재해평가 완료

○ '24.  4. : 막구조 면적 및 코트배치 안 결정

○ '24.  4.~6. : 사업계획 확정에 따른 설계보완(토목, 건축)

○ '24.  5. : 공원조성계획(변경) 심의완료

○ '24.  6. : 공유재산 취득․처분 시의회 승인

○ '24.  8. : 공공디자인 자문 변경 심의 및 건설기술심의 → 의견반영 설계보완

○ '24.  9. : 실시계획인가(건축위원회 구조심의 등) 및 시 계약심사

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2023년	2024년
예산액	5,500	2,046	3,453
확보액	5,500	2,046	3,453
집행액	93	93

☐ 향후계획

○ '24. 10. : 관급자재 심의(막구조, 추정가격 10억원이상)

○ '24. 10. : 공사계약 및 착공

○ '25.  6. : 공사준공

담당부서		스포츠산업과장 박진홍 스포츠시설팀장 오상현 주무관 신윤철(☎4459)