관광경제	구)경찰서 사거리 교통 병목 해소(우회도로개설)		담당부서
133
			도시디자인과

	최종목표
구)경찰서 사거리 교통 병목 해소를 통한 시민 삶의 질 제고

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	10 %	총사업비	21,100 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2028. 12.

○ 위    치 : 용해지구 및 실내체육관 도로 일원

○ 사 업 비 : 21,100백만원(도비 7,500, 시비 13,600)

○ 사업내용

연번	사업명(위치)	사업비(억원)	사업량	비고
①	구)경찰서사거리 ~ 용해삼거리	13	차로확장L=400m [왕복 4차로 ⇒ 왕복 6차로]
②	실내체육관 ~ 삼향동주민센터	148	위험도로개선 L=1.7km [1구간: L=1,200m, 2구간: L= 500m]
③	실내체육관 ~ 양을산산림욕장	50	도로개설 L=650m, B=12m(왕복 2차선)

○ 위 치 도

1

위험도로 1구간

L=1,200m

2

3

위험도로 2구간

L=500m

구)경찰서사거리

L=400m

양을산산림욕장L=650m

☐ 추진현황

○ ‵21. 11. : 구)경찰서사거리 ~ 용해삼거리간 교통개선대책 검토 용역 완료

○ ‵22. 10. : 구)경찰서사거리~용해삼거리 간 도로구조개선 실시설계 발주

○ ‵23.  4. : 위험도로 구조개선 및 산림욕장 도로개설 실시설계 착수

○ ‵23.  9. : 구)경찰서사거리 ~ 용해삼거리 간 도로구조개선 설계 완료

○ ‵24.  4. : 도시관리계획(도로) 변경[교통량, 경제성 감안 도로 축소]

- 실내체육관 ~ 삼향동주민센터 도로 : 대로1류(B=35m) ⇒ 중로2류(B=20m)

- 실내체육관 ~ 양을산산림욕장 도로 : 중로1류(B=20m) ⇒ 중로3류(B=12m)

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	달성여부	누적 진도율
2022	◦구)경찰서 실시설계 추진	◦실시설계 추진 중	달성	10%
2023	◦구)경찰서 실시설계 완료 ◦위험도로 실시설계 추진 ◦양을산 도로개설 실시설계 추진	◦실시설계 추진 완료 ◦실시설계 추진 중	달성	30%
2024	◦위험도로 공사(1구간) 추진 ◦양을산 도로개설 실시설계 추진	◦실시설계 완료 ◦실시설계 추진	추진 중	50%
2025	◦구)경찰서 공사 추진 ◦위험도로 공사(1구간) 추진 ◦양을산 도로개설 실시설계 추진	-	-	80%
2026 ~	◦위험도로 공사(1구간) 완료 ◦위험도로 공사(2구간) 추진 ◦양을산 도로개설 공사 추진	-	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	21,100	200	200	2,500	4,800	13,400
확보액	2,900	200	200	2,500	-	-
집행액	325	-	224	101	-	-

☐ 향후계획

○ ‵24. 12. : 실내체육관~삼향동주민센터 간 위험도로 개선공사(1구간) 착공

○ ‵25.  1. : 구)경찰서사거리~용해삼거리간 도로구조개선 공사 착공

○ ‵25.  6. : 구)경찰서사거리~용해삼거리간 도로구조개선 공사 완공

○ ‵26. 12. : 실내체육관~삼향동주민센터 간 위험도로 개선공사(1구간) 완공

○ ‵27.  1. ~ : 실내체육관~삼향동주민센터 간 위험도로 개선공사(2구간) 착공

담당부서		도시디자인과장 송창헌 개발팀장 윤재웅 주무관 우기훈(☎3445)