기획복지	목포역사 신축 및 철도시설 재배치		담당부서
40
			도시디자인과

	최종목표
미래 발전에 부합하는 역사 현대화를 통한 지역경쟁력 강화 및 수요증가에 대비한 철도시설 재배치로 이용객의 편의 도모

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	40 %	총사업비	219,000 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 2028.

○ 위    치 : 목포시 호남동 1-1, 목포역 일원

○ 사업내용 : 목포역 신축 및 철도시설 재배치

-  (목포역 신축) 노후역사 개량 1식

-  (철도시설 재배치) 착발선 증설, EMU열차 통합정비고 신설 등 기능 개선

○ 사 업 비 : 2,190억원(역사 신축 490, 철도시설 재배치 1,700)

☐ 추진현황

○ ‵22.  3. : 철도시설 재배치 및 기능개선 구상(목포시)

○ ‵22.  7. : 철도시설 재배치(안) 반영 건의(목포시 ⇒ 국토부)

○ ‵22.  9. : 노후역사 신축 사업비 반영 건의(목포시 ⇒ 국토부)

○ ‵23.  3. : 철도시설 재배치 사전타당성조사(국토부)

○ ‵23.  8. : 노후역사 신축사업 예산 반영 확정(국토부)

○ ‵24.  5. : 노후역사 시설개선사업 설계 공모 완료(한국철도공사)

○ ‵24.  9. : 노후역사 시설개선사업 설계 착수(한국철도공사)

- 설계기간 : ’24. 6. ~ ’25. 12. / 용역사 : ㈜해마 종합건축사사무소

○ ‵24.  9. : 철도시설 재배치 호남고속철도 2단계 사업 반영

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	달성여부	누적 진도율
2022	◦목포역 대개조 사업 계획 및 국비 반영 요청	◦사업 예산 확보 및 신속 추진 지속 건의	달성	20%
2023	◦(사업추진)목포역사 신축 실시설계 및 국비 반영	◦목포역 신축사업 설계비 ‘24년 정부 예산안 반영	달성	40%
2024	◦(사업추진)목포역사 신축 및 철도시설 재배치 추진	◦목포역 신축 설계공모 착수 ◦철도시설 재배치 협의 완료	추진중	60%
2025	◦(사업추진)목포역사 신축 및 철도시설 재배치 추진	-	-	80%
2026	◦(사업추진)목포역사 신축 및 철도시설 재배치 추진	-	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	219,000	0	0	300	5,330	213,370
확보액	219,000	-	-	300	5,330	213,370
집행액

* (목포역 신축) 24년 설계비 2.75억원 반영 ⇒ 실시설계 착수(’24. 5. 공모, ’24. 9. 착수)

⇒ 24년 실시설계, 25년 공사 착공 등 사업 추진

* (시설 재배치) 철도시설 재배치 사업 호남고속철도 2단계 사업 반영

⇒ 25년 실시설계, 26년 공사 착공 등 사업 추진

☐ 향후계획

○ ‵25.  1. ~ : 철도시설, 노후역사 업무 지속 협의(국토부 등)

○ ‵25.  1. ~ : 철도시설 재배치 사업 실시설계 용역 추진

○ ‵25. 12. ~ : 노후역사 시설개선사업 실시설계 완료

담당부서		도시디자인과장 송창헌 개발팀장 윤재웅 주무관 우기훈(☎3445)