관광경제	해상풍력 배후단지 및 지원부두 조성		담당부서
54
			전략산업과

(기준일 : `24. 9. 30.)

	최종목표
성공적인 해상풍력 산업 생태계 조성을 위한 지원인프라 구축

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	15 %	총사업비 (예산확보)	150,000 백만원 (-)
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2028

○ 위    치 : 목포 신항 일원

○ 사 업 량 : 철재부두 1선석(5만톤급) 및 2단계 배후단지(238,000m2) 조성

○ 사 업 비 : 약 1,500억원(국비)  * 추정사업비

○ 사업내용 : 해상풍력 전진기지 조성을 위한 지원인프라 구축

☐ 추진현황

○ 해상풍력 지원부두 및 배후단지 조성 건의 및 예타 신청 : `22. 8.

- 해수부 의견 : 사업타당성 및 근거(향후 물동량 등) 보완 후 재신청

○ 해상풍력 지원부두 및 배후단지 건설을 위한 타당성 보완 : ~ `22. 12.

- 해상풍력 관련 예상 철재물동량 근거 등 사업추진 설득논리 보완

○ 신항 지원부두 건설 건의를 위한 정부부처(해수부) 방문	: ‘23. 2.

- 해수부 의견 : 관련 용역 결과 국가기본계획* 반영 후 추진 요망

* 관련 국가계획 : 제2차신항만건설기본계획, 제4차전국항만기본계획

○ 지원부두 적기 건설 건의(도, 시 → 해수부) : `23. 3. ~ `24. 2.(3회)

○ 글로벌 기업 투자협약 체결(`24. 4.) 및 기회발전특구 지정 (`24. 6.)

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	달성여부	누적 진도율
2022	사업 타당성 보완	근거보완 및 부처 건의	달성	5%
2023~2024	• 신항 재배치 의견 반영 및 조기건설 건의 • 국가 기본계획 반영	해수부 지속 건의 활동 진행 중(道 협력)	추진중	30%
2025	사전타당성 조사 및 국고 반영 요구	-	-	50%
2026	국고 확보 및 지원인프라 설계	-	-	60%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	150,000	-	-	-	-	150,000
확보액	-	-	-	-	-	-
집행액	-	-	-	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 기본절차 모두 이행 후 사업착수 시 `29년 이후 조성 완료 예상

- 국가계획 변경고시(`24), 타당성 조사(`25), 실시설계(`26), 착공(`27)

☞ 사업추진 시급성을 고려, 기본계획 반영 후 조속한 추진 건의 필요

☐ 향후계획

○ 국가계획 반영 및 국고 확보를 통한 인프라 조기 건설 건의 : 계속

- 조기 건설을 위한 예비타당성 조사 면제 건의(`25)

*  ‘제2차신항만건설기본계획 수정고시 (해양수산부, `24. 12.)

’제4차전국항만기본계획 수정고시(해양수산부, `25. 12.)

○ 국내․외 관련기업(베스타스 등) 투자 유치 행․재정 지원 : `25. 1. ~

담당부서		전략산업과장 천승환 신산업팀장 박철우 주무관 정재원(☎4049)