관광경제	친환경선박 산업 집적화단지 조성		담당부서
56
			전략산업과

	최종목표
글로벌 수준의 친환경선박 연구‧실증‧교육 특화단지 구축

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	60 %	총사업비 (예산확보)	117,904백만원 (80,645백만원)
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2031   * `25년까지 가시적 성과도출(인프라구축 완료)

* 해수부 공모사업(4건)의 일환으로 추진 中(`20~31, 총 1,585억원)

○ 위    치 : 목포 남항 일원

○ 사 업 량 : 남항(32,000m2) 내 연구지원 인프라 5개동 구축 등

- 전기추진차도선 등 신기술 적용 미래형선박(3척) 개발 포함

○ 사업내용 : 국내 최초 친환경선박 클러스터 조성 및 운영

☐ 추진현황

○ 남항 연구지원 인프라 구축 착공식	: `22. 10. 27.

○ 교육연구지구 조성 및 활용방안 수립 연구용역  : `23. 5. ~ 12.

○ 전기추진차도선 개발완료 및 해상실증 운항	: `23. 6. ~

○ 해상테스트베드 및 재생에너지 기반 여객선 건조     : `23. 6. ~ `24. 12

- 해상테스트베드(한국메이드), 재생에너지 기반 여객선(빈센)

○ 연구인프라 2개동(충전시험동, 관제유지보수동) 준공	: `23. 8.

○ 연구인프라 3개동 착공	: `23. 11.

- 연구동(본관), 전력시험동, 국제협력복지동 (경비동)

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	달성여부	누적 진도율
2022	연구지원 인프라 착공	1단계 인프라 착공식	달성	30%
2023	1단계 준공 및 신규 선박 설계	1단계 인프라 준공 완료	달성	40%
2024	연구 및 교육거점 기반 마련	2단계 인프라 공사중	추진중	60%
2025	전체 인프라 구축 완료	-	-	100%
2026	인프라 지속 운영 및 확대	-	-	-

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
예산액	117,904	22,608	32,366	28,191	22,830	11,909
확보액	80,645	22,608	32,366	25,671	-	-
집행액	54,974	22,608	32,366	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 시비 매칭예산 확보를 통한 공약 적기이행 추진 필요(`25년 완공)

* 24년 시비 매칭금액 53억원 중 31.8억원 확보 (부족분 ’25년 본예산 요구)

☐ 향후계획

○ `25년 신규 공모사업(R&D) 수주(2건)	: `25년 4월

- 녹색해운항로 구축 및 연료공급 실증 / 친환경연료 화재폭발 대응기술 개발

○ 연구인프라 전체(5개동) 준공	: `25년 11월

- 연구거점(KRISO) 운영(`25. 12.) 및 석박사 학위과정(UST) 운영(`26년~)

담당부서		전략산업과장 천승환 신산업팀장 박철우 주무관 정재원(☎4049)