관광경제	목포 원도심 관광 야시장 개장		담당부서
67
			관광거점도시추진단

(기준일 : `24. 9. 30.)

	최종목표
최신 관광 트렌드인 야간 관광콘텐츠, 관광 야시장(프리마켓)을 운영하여 관광객의 볼거리 확대 원도심을 사업지로 지정하여 발전시킴으로써 시 전체의 야간 관광콘텐츠 균형 발전 기여

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	50 %	총사업비	1,100백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~

○ 위    치 : 원도심 일원

○ 사업내용 : 지역 상인, 청년 예술가 등이 참여하는 야간 프리마켓 운영

- (1단계) 야간 프리마켓 홍보를 위한 시범운영

- (2단계) 원도심권 주요 상가거리 확대

- (3단계) 야간 관광 프리마켓 상설화

○ 사 업 비 : 총 1,100백만원

☐ 추진현황

○ 원도심 관광 야시장 시범 운영

- 사 업 명 : 관광야시장 「1897 야시장 」

- 일    시 : 2024. 10.19.(토)

- 장    소 : 목포미식문화갤러리 해관1897

- 예    산 : 44,000천원(관광거점도시 육성사업)

- 주요내용 : 플리마켓 및 체험부스, 푸드존, 시민참여이벤트 개최, 퍼포먼스 공연 및  미디어파사드 경관 조명 등 운영

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	달성여부	누적 진도율
2023	기초 자료 수집	타 지차례 사례 분석 등	달성	10%
2024	추진방향 설정	방향 수립 및 시범 운영	달성	50%
2025	기본계획 수립	-	-	70%
2026 ~	야시장 사업 참여자 모집 및 운영	-	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	1,100	-	-	44	-	1,056
확보액	44	-	-	44	-	-
집행액	44	-	-	44	-	-

☐ 향후계획

○ 기초 수요조사(지역상인회 간담회 및 주민 설명회 등) : ’25. 2.

○ 추진계획 수립                                     : ’25. 3.

- 원도심에서 개최되는 주요 행사 연계하여 시너지 효과 극대화

- 원도심 상점가의 관내 소상공인, 청년기업과 협업을 통한 상생경제 실천

- 야시장 상설 운영으로 야간관광 관광 활성화

○ 예산 확보                                        : ’25. 7.

- 홍보 조형물, 야간 조명 설치비, 매대 지원비 등 소요예산 확보

(시 재정상황 고려, 예산 탄력 운영)

○ 관광 야시장 사업 참여자 모집 공고 및 선정       : ’26. 3. ~

- 참여자 공모(일반음식 판매점, 잡화점 분류 선정)

- 사업 설명회 및 참여자 선정

○ 관광 야시장 운영                                  : ’26. 7.限

담당부서		관광거점추진단장 김명준 미식산업TF팀장 최안수 주무관 박진희(☎8860)