관광경제	목포권 내 학교(초·중·고) 재배치 추진		담당부서
91
			인재육성과

(기준일 : `24. 9. 30.)

	최종목표
학교 이전을 통한 교육환경 개선, 기존부지 활용을 통한 원도심 활성화

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	90%	총사업비 (예산확보)	64,400백만원 (-백만원)
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2028년

○ 대    상 : 관내 초·중·고 학교

○ 사 업 량 : 고등학교 2개소(목포고, 목포여고)

○ 사업내용 : 목포고·목포여고 통합 이전·재배치

○ 재배치 확정 : 2개교(목포고, 목포여고)

○ 이전부지 : 옥암 대학부지(33,000㎡)

○ 사 업 비 : 644억원(전라남도교육청)

- 부지매입비 137억원, 시설비 492억원, 교재교구비 15억원

☐ 추진현황

○ 통합 이전·재배치 협약 체결 동의안 가결(시의회) : ’24. 1. 19.

○ 목포시-전라남도교육청 업무협약 체결 : ’24. 2. 2.

○ 고등학교 통합 이전·재배치 주민설명회(장소: 목포고) : ’24. 5. 10.

○ 통합․이전 학교용지 준공 : ’25. 4.

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	달성여부	누적 진도율
2023	• 교육지원청 실무협의	• 목포고‧목포여고 재배치 등 업무 협의	달성	30%
2024	• 재배치 업무협약 체결	• 상호 협력 MOU 체결 • 통합 이전 재배치 주민설명회 개최 등	달성	90%
2025 ~ 2028	• 옥암 대학부지 준공 등 통합 개교를 위한 행정지원 지속	-	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액
확보액		해	당	없	음
집행액

☐ 문제점 및 대책

○ 옥암 대학부지 부분준공 필요 : 도시유산과 추진 중

○ 목포고·목여고 기존부지 활용방안 관련 주민의견 수렴 등 필요

- 2024. 5. 10.(금) 주민설명회 개최(장소 : 목포고)

- “원도심 활성화 종합방안” 연구 중 (도 교육청 산하「전남교육정책연구소」)

☐ 향후계획

○ 학교용지 부분준공(목포시)                    : ’ 25. 4.

○ 공사 착공 및 준공(도 교육청)                 : ’ 26. 2. ~ ’ 27. 11.

○ 통합학교 개교                              : ’ 28. 3.

담당부서		인재육성과장 윤선옥 인재육성팀장 이현주 주무관 김소망(☎8654)