목포 대양산단 진입로 개설공사 ‘특혜 의혹’ 관련 보도에 대한 해명

□ 보도 언론 : 남도일보(김정길기자, ‘16. 1. 11일)

□ 보도 내용

○ 대양산단 진입로 개설공사와 관련 목포시가 수차례 공사기간 연장과 설계변경 등을 해준 사실이 드러나 특정업체에 특혜를 준 것 아니냐는 의혹이 일고 있음

○ 2015. 10. 22일 완공 예정인 공사를 공사중 비가 많이 내렸다는 이유를 들어 시공업체에 대해 11월 21일까지 한달간 공사기간을 연장한데 이어 다시 12월 31일까지 총 40일간 연장해주었으나 2015년에는 평균 강우량이 적었으며, 11월에만 평소보다 비가 더 내린 것으로 나타나 공사기간을 연장해준 뒤 비가 내린 것으로 시의 해명은 앞뒤가 맞지 않아 설득력을 얻지 못함.

○ 준공기간인 12월 31일에도 공사가 마무리 되지 않아 최소 한달 이상 공사를 더 해야 할 상황인 것으로 알려졌으나 시는 설계변경을 한다며 공사중지명령을 내린 뒤 추가로 11억여원의 공사비까지 증액시키면서 공사기간을 늘려줌

○ 시공사는 공사 중지명령을 받은 12월 30일에도 콘크리트 타설 작업을 하는 등 공사를 진행하였고, 비가 내린가운데 공사를 강행 부실공사 우려까지 제기

□ 지적기사 해명

	< 공사개요 >
○ 공사기간 : 2011. 1. 24 ~ 2015. 12. 30 ○ 공 사 비 : 총괄분 30,839백만원( 도급 25,195, 관급 5,644 ) 시행분(5차분) 9,704백만원(도급 7,719 관급 1,985) ○ 공사중지일자 : 2015. 12. 29 ○ 도 급 자 : 세원건설(주) ○ 조 경 분 : 790백만원

○ 당초 공사기간은 ‘11. 1. 24 ~ ’15. 11. 13이었으나 축구센터 민원발생 및 대양산단 사토중단으로 인한 준공일을 2015. 11월 13일에서 2015년 12월 18일로 35일간 연장

○ 2차 공사 연장은 ‘15. 12. 18 ~ ’15. 12. 30일까지 잦은 우천관계로 마무리 공사인 포장공사 등을 할 수가 없어서 우천일수만큼 12일간을 연장

○ 공사 중지후 30일날 공사 진행했던 사항은 일부 남아있는 공종이 있어 마무리 차원에서 공사를 진행했던 사항이고 현재는 공사중지 상태로 일을 하지 않고 있음(현재 공정 99.95%)

○ 대양산단 진입도로는 전액 국비 사업으로 사업비 집행 후 남은 잔액은 전액 불용처리 원칙으로 금년 진입도로 개설공사가 준공되면 잔여 사업비 사용이 곤란한 사항이었음

○ 이에 국토교통부와 협의(12월 21일, 12월 29일) 끝에 조경식재 공사는 별도 발주가 안 된다는 입장이었고 사업비 잔액 중 조경식재를 공사에 반영하여 추진하도록 12월 29일 협의가 완료되어 790백만원의 사업비를 총사업비 범위내에서 조경식재를 반영한 사항임

○ 조경 식재 외 2건은 총 사업비 범위내에서 설계에 반영한 사항이며, 반영되면 공사기간을 연장해야 되나 동절기 식재공사 시행시 수목고사 및 동해 등을 방지하기 위하여 식재 가능 시기인 2월 중순이후 식재 완료후 준공할 계획임

○ 조경식재를 진입도로 개설공사에 반영하지 않으면 준공 후 시비로 별도 발주하여 진행했어야 될 사항이었으나 시비 절감을 위해 국토교통부와 협의 후 추진한 사항으로 특혜의혹과는 전혀 무관한 사항임