[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-17	담당부서 작성자	(도시발전사업단/ 도시재생과) (김선웅/061-270-3649)
정 책 명	도심관통 도로개설
사업개요	○ 추진배경 - 원도심 중심상가와 연계되는 구)중앙시장～목여고 교차로간 도심관통도로를 개설하여 접근성 향상 및 도심순환 교통체계 구축 ○ 추진기간 : 2008 ~2018 ○ 총사업비 : 36,180백만원 ○ 주요내용 - 도로개설 L=555m, B=20m
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘05. 10. 28. : 지방재정투융자 심사(자체) - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 추영동, 책임관 이상호, 실무관 오병주 ○ ‘06. 04. 18. : 용역과제 사전심의 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 추영동, 책임관 이상호, 실무관 오병주 ○ ‘07. 03. 23. : 도시관리계획 변경 및 실시설계용역 추진 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 최창호, 책임관 황용규, 실무관 오병주 ○ ‘07. 11. 27. : 도시관리계획시설 결정(변경) 지형도면 고시 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 최창호, 책임관 황용규, 실무관 오병주 ○ ‘08. 05. 27. : 실시계획인가 사전 공람공고(한복거리~백제약국) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박경곤, 책임관 박금재, 실무관 서신우 ○ ‘08. 09. : 도시관리계획 시설사업(도로) 실시계획인가 고시 ※ 도로개설 L=555m, 중 1단계 L=165m(1․2구간) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 박금재, 실무관 서신우 ○ ‘09. 12. : 보상계획 공고 및 열람(1단계 1차 구간 : L=89m, B=20m) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 윤병종, 실무관 민경종 ○ ‘10. 01~12 : 한복거리구간(1차구간) 보상 및 지장물 철거 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김웅민, 실무관 윤정호 ○ ‘10. 12. : 도시관리계획시설사업(도로) 실시계획인가(변경)고시 ※ 사업기간 연장 : ‘10. 12. 31. → ‘14. 12.31. - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김웅민, 실무관 윤정호 ○ ‘13. 7. ~ 12월 : 2차구간(L=76m) 65억원(보상49, 공사16)중 보상비 39억원(백제약국 10억원 제외) 3회 분할지급(13년 8억원 보상) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 박남규, 실무관 김진희 ○ ‘14. 01. : 2구간 16필지 분할보상금 2차분 지급 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 박남규, 실무관 정대균 ○ ‘14. 12. : 국비 특별교부세 확보(10억) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김재성 실무관 김형중 ○ ‘15. 02. : 2구간 분할보상금 3차분 지급완료(백제약국 제외) - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 09. : 2구간 지장물 철거 완료(백제약국 제외) - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 11. : 2구간 지장물(백제약국) 철거 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김방선, 실무관 이인정 ○ ‘16. 04. : 1~2구간 도로개설공사 추진 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 유윤수, 실무관 이석태 ○ ‘16. 05. : 1~2구간 도로개설공사 착공 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 유윤수, 실무관 이석태 ○ ‘16. 11. : 1~2구간 도로개설공사 준공 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김신주, 실무관 김선웅 ○ ‘17. 1. : 3구간 도로개설공사 실시설계용역 착수 - 관련자 : 도시재생과 과장 서태빈, 책임관 김신주, 실무관 김선웅 ○ ‘17. 5. : 3구간 도로개설공사 실시설계용역 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 서태빈, 책임관 김신주, 실무관 김선웅