정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	(2018-27) 목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업
② 추진배경	생활폐기물 매립시설의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립시설 확보가 어려우므로, 사용중인 매립시설의 일부 폐기물을 굴착 후 재사용함으로써 매립시설의 사용기간을 연장하기 위함.
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 대양로 241-41 일원(목포시 위생매립장내) ○ 사 업 량 : 굴착 600,000㎥, 선별 750,000㎥, 조성 50,690㎡ ○ 사 업 비 : 40,820백만원(국비 19,146, 시비 21,674)
④ 사업부서	목포시 자원순환과		⑤ 담당자	공업6급 신성원 자원순환과장 오형순
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업		⑦ 사업기간	2016~2021
<그간 주요 추진내용>
○ 선별·압출포장 공법선정 심의 위원회 개최		‘18.1.26	오형순 과장 박동구 담당 신성원 담당자
○ 선별·압출포장 공법선정 기술 제안서 접수		‘18.1.12	김덕용 과장 박동구 담당 신성원 담당자
○ 선별·압출포장 공법선정 현장 설명 및 참가등록		‘17.12.26	김덕용 과장 박동구 담당 신성원 담당자
○ 선별·압출포장 공법선정 기술 제안서 제출공고		‘17.12.18	김덕용 과장 박동구 담당 신성원 담당자
○ 설계용역 일시정지(가연성폐 기물 처리방안 협의)		‘17.11.22	김덕용 과장 박동구 담당 신성원 담당자
○ 설계용역 착수보고회 개최 (부시장실)		‘17.7.04	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 설계용역 계약체결		‘17.6.22	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 담당자

○ 설계용역 지명경쟁 입찰공고	‘17.5.30	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 설계용역 PQ평가	‘17.5.25	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 설계용역 집행계획 및 PQ제 출안내 공고	‘17.4.19.	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 설계용역 계약의뢰	‘17.4.17	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 설계용역 일상감사	‘17.4.10	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 설계용역 계약심의	‘17.3.31	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 설계용역 PQ심의	‘17.3.17	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 설계용역 계약심사	‘17.1.13	문명식 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 대형공사 입찰방법 심의	‘16.9.20	문명식 과장 박동구 담당 제갈명 담당자
○ 설계비 시비 확보(시비 5억)	‘16.7.29	문명식 과장 염송주 담당 제갈명 담당자
○ ’17년 국고보조사업 신청	‘16.3.3	문명식 과장 염송주 담당 제갈명 담당자
○ 지방재정투자사업 심사	‘16.3.2	문명식 과장 염송주 담당 제갈명 담당자
○ 설계비 국비 확보(국비 5억)	‘15.12.7	문명식 과장 류희열 담당 제갈명 담당자

○ 용역과제 사전심사	‘15.10.16	문명식 과장 류희열 담당 이태양 담당자
○ 중기지방재정계획 반영 (2016~2020)	‘15.8.24	문명식 과장 류희열 담당 이태양 담당자
○ ’16년 국고보조사업 신청	‘15.4.10.	문명식 과장 류희열 담당 이태양 담당자
○ 타당성조사 및 기본계획 용역완료	‘14.2.13	문명식 과장 류희열 담당 이태양 담당자
○ 타당성조사 및 기본계획 용 역시행 계획수립	‘13.3.11	박석형 과장 염송주 담당 장진영 담당자